АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАНИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       от 13.09.2016г.  №503
       г. Данилов

Об утверждении муниципальной Программы «Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям городского поселения Данилов в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.».		

На основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» по решению вопросов местного значения по организации тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности Муниципальных программ городского поселения Данилов от 04.09.2014 года №315, в целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.	Утвердить муниципальную программу «Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям городского поселения Данилов в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.» (далее Программа) согласно приложению к настоящему Постановлению.
2.	Установить, что в ходе реализации Программы корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учётом наличия средств в бюджете городского поселения Данилов.
3.	Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского поселения Данилов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.	Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации городского поселения Данилов по ЖКХ, градостроительству и городскому хозяйству Свечушкина И.В.
                       
И.о.Главы администрации                                                             М.В.Смирнова

	Приложение к Постановлению администрации городского поселения Данилов 
от «13» сентября 2016 г. №_503	
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям городского поселения Данилов в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.»
 (полное наименование Программы)
на 2016 год
Наименование Программы	Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям городского поселения Данилов в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.	
Ответственный исполнитель Программы 	Администрация городского поселения Данилов	
Соисполнители Программы	Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства»
Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис»	
Цели Программы	Обеспечение готовности систем водоснабжения к осенне-зимнему периоду 2016-2017 г.г.	
	Обеспечение готовности систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 2016-2017 г.г.	
Задачи Программы	Снижение вероятности возникновения аварий на сетях водоснабжения в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. путем проведения ремонта наиболее изношенных участков.	
	Снижение вероятности возникновения аварий на сетях теплоснабжения в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. путем проведения ремонта наиболее изношенных участков.	
Основные целевые показатели (индикаторы) Программы	Сокращение износа сетей водоснабжения на 2%.	
	Сокращение износа сетей теплоснабжения на 4%	
	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. на 15%	
Сроки и этапы реализации Программы	2016 год	
Объемы и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования – 2856934,84 руб.	
	из них:
бюджет городского поселения Данилов 155842,81 - руб.	
	областной бюджет – 2701092,03 руб.	
Контактные лица	Заместитель главы администрации Свечушкин И.В.	
Раздел 1. Содержание проблемы (задачи) Программы, анализ причин её возникновения. 
Климат нашего региона обусловлен резкими температурными колебаниями, устойчивыми морозами, продолжительным отопительным сезоном. Данные обстоятельства объективно определяют ответственность всех работников жилищно–коммунального хозяйства за качественную подготовку всех объектов ЖКХ.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» для выполнения полномочий по содержанию муниципального имущества при решении вопросов местного значения по организации тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения необходимо принять меры путём проведения ремонта объектов инженерной инфраструктуры. Системы теплоснабжения и водоснабжения являются частью инфраструктуры, содержание которых необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей городского поселения Данилов. 
В настоящее время в реестре муниципальной собственности учитывается 19735,98 м сетей водопровода и сетей теплоснабжения протяжённостью 8856,7 м.
Большинство из указанных объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ муниципальных коммунальных сетей составляет 75%. Высока аварийность на муниципальных сетях. 
Раздел 2. Цели, задачи Программы, целевые показатели. 
В целях обеспечения населения городского поселения Данилов качественными услугами по водоснабжению, теплоснабжению, водоотведению администрацией городского поселения Данилов подготовлена настоящая Программа, которая включает мероприятия, направленные на проведение ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.
Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:
- Приведение технического состояния оборудования и инженерных сетей, в соответствие с требованиями  нормативных документов.
- Увеличение срока службы инженерных сетей при применении современных материалов и технологий, при высоком качестве работ.
В рамках Программы планируется капитально отремонтировать 13 наиболее аварийных участков коммунальных сетей, числящихся в реестре муниципальной собственности, протяжённостью 495,7 м. Реализация указанных мероприятий позволит сократить износ сетей теплоснабжения на 4%, сетей водоснабжения на 2%, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций при прохождении осенне-зимнего отопительного периода 2016-2017 г.г. на 15%.

Раздел 3. Система мероприятий.

№№
п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Исполнители, участники (главные распорядители)	Объем работ,
м	Объем финансирования,
руб.	Источник 
финансирования	Объёмы финансирования, руб.	Ожидаемый результат, 
срок исполнения мероприятия	
						2016 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Проведение ремонта систем водоснабжения							
	в том числе:							
1.1	Ремонт участка водопроводных сетей, г. Данилов, ул. Ярославская, д.52	МУ «Управление городского хозяйства»	218	884096,12	ОБ	839891,31	Проведение ремонта октябрь, ноябрь 2016	
					МБ	44204,81		
1.2	Ремонт участка водопроводных сетей, г. Данилов, ул. Ярославская д.75А	МУ «Управление городского хозяйства»	10	86770,12	ОБ	82431,61	Проведение ремонта сентябрь, октябрь 2016	
					МБ	4338,51		
	Итого по задаче 1			970866,24	ОБ	922322,92		
					МБ	48543,32		
2.	Проведение ремонта систем теплоснабжения							
	в том числе:							
2.1	Ремонт участка тепловой сети по адресу: г. Данилов, ул. Шарохина, д. 10	МКП «Теплосервис»	40	335166,02	ОБ	318407,71	Проведение ремонта сентябрь 2016	
					МБ	16758,31		
2.2	Ремонт участка тепловой сети по адресу: г. Данилов, ул. Петербургская, д. 92	МКП «Теплосервис»	18	110407,88	ОБ	104887,48	Проведение ремонта, сентябрь 2016	
					МБ	5520,40		
2.3	Ремонт участка тепловой сети по адресу: г. Данилов, ул. Володарского, д. 66-68	МКП «Теплосервис»	12,7	128011,12	ОБ	121610,56	Проведение ремонта, сентябрь 2016	
					МБ	6400,56		
2.4	Ремонт участка тепловой сети по адресу: г. Данилов, ул. Володарского, д. 40	МКП «Теплосервис»	8	54128,96	ОБ	51422,51	Проведение ремонта, сентябрь 2016	
					МБ	2706,45		
2.5	Ремонт участка тепловой сети по адресу:  г. Данилов, ул. Петербургская, д. 90-92	МКП «Теплосервис»	3	34404,08	ОБ	32683,87	Проведение ремонта, сентябрь 2016	
					МБ	1720,21		
2.6	Ремонт участка тепловой сети по адресу: г. Данилов, ул. Володарского, д. 42	МКП «Теплосервис»	20	107495,64	ОБ	102120,85	Проведение ремонта, сентябрь 2016	
					МБ	5374,79		
2.7	Ремонт участка тепловой сети по адресу: г. Данилов, ул. Володарского, д. 58-17	МКП «Теплосервис»	16	106111,5	ОБ	100805,92	Проведение ремонта, сентябрь 2016	
					МБ	5305,58		
2.8	Ремонт участка тепловой сети по адресу: г. Данилов, ул. Земляной вал – Карла Маркса	МКП «Теплосервис»	60	383507,08	ОБ	364331,72	Проведение ремонта, сентябрь 2016	
					МБ	19175,36		
2.9	Ремонт участка тепловой сети по адресу: г. Данилов, ул. Шарохина, д. 11	МКП «Теплосервис»	26	136376,14	ОБ	129557,33	Проведение ремонта, сентябрь 2016	
					МБ	6818,81		
2.10	Ремонт участка тепловой сети по адресу: г. Данилов, ул. Шарохина, д. 13	МКП «Теплосервис»	40	275491,06	ОБ	261716,50	Проведение ремонта, сентябрь 2016	
					МБ	13774,56		
2.11	Ремонт участка тепловой сети по адресу: г. Данилов, ул. Карла Маркса, д.64	МКП «Теплосервис»	24	201289,12	ОБ	191224,66	Проведение ремонта, сентябрь 2016	
					МБ	10064,46		
	Всего по задаче 2	МКП «Теплосервис»		1872388,6	ОБ	1778769,11		
					МБ	93619,49		
3	Проверка смет	МУ «Управление городского хозяйства»		13680	ОБ	0		
					МБ	13680		
	Всего по задаче 3	МУ «Управление городского хозяйства»		13680	ОБ	0		
					МБ	13680		
	ВСЕГО:			2856934,84	ОБ	2701092,03		
					МБ	155842,81		

Список сокращений, используемых в программе
МУ «Управление городского хозяйства» - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства»;
МКП «Теплосервис» - Муниципальное казенное предприятие «Теплосервис»
ОБ – областной бюджет;
МБ – местный бюджет

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства областного и местного бюджета. 
Структура финансирования Программы
Наименование ресурсов	Единица
измерения	Потребность	
		всего	
			
Финансовые ресурсы	руб.	2856934,84	
- областной бюджет	руб.	2701092,03	
- местный бюджет	руб.	155842,81	

Раздел 5. Система мониторинга и контроля над реализацией Программы.
Управление реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы – администрация городского поселения Данилов.
ответственным исполнителем Программы выполняются следующие основные задачи:
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы. 
- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации.
Исполнители Программы осуществляют:
- реализацию закрепленных за ними мероприятий;
- нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации закрепленных за ними мероприятий Программы;
- контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;
- заключение с организациями, претендующими на участие в Программе, соглашений, определяющих порядок участия организаций в реализации закрепленных за исполнителем Программы мероприятий.
Контроль целевого использования средств местного бюджета, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности реализации Программы

Оценка результативности и эффективности реализации Программы по каждому разделу осуществляется заместителем главы администрации городского поселения Данилов по ЖКХ, градостроительству и городскому хозяйству в сроки, установленные для сдачи отчётности. Расчет производится по показателям достижения целей Программы:
Индекс стратегической результативности программы (Rст) для целевых показателей подпрограммы (программы) рассчитывается путём установления степени достижения показателей целей программы на конец отчетного периода по формуле:
Pфакт
Rст = ––––––––х100%,
Pплан
Pплан – количество мероприятий запланированных Программой.
Pплан=13
Pфакт – количество выполненных мероприятий.
При значении показателя результативности 95 процентов и более результативность реализации Программы признаётся высокой, при значении от 85 до 95 процентов – средней, при значении 85 процентов и менее – низкой.
Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) рассчитывается путём установления соотношения степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий по формуле: 
Fфакт
Eисп= ––––––––––––––х100% ,
Fплан
где:
Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;
Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.
При значении показателя эффективности 100 процентов и более эффективность реализации Программы признаётся высокой, при значении от 90 до 100 процентов – средней, при значении 90 процентов и менее – низкой.

Отчёт о выполнении Муниципальной Программы
« ____________________________________________________________________________________________________________»
(полное наименование Программы)
Ответственный исполнитель________________________________________________________________________________________ (наименование структурного подразделения администрации)
1.	Информация о результатах и финансировании Программы:
№№ п/п	Наименование задачи /мероприятия/	Результата выполнения задачи /мероприятия/	Объем финансирования, тыс.руб.	Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана	
		Наименование (единица измерения)	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Задача 1.							
1.1.	Мероприятие 1							
1.2.	Мероприятие 2							
	и т.д.							
1.2.	Задача 2.							
1.2.1.	Мероприятие 1.							
1.2.2.	Мероприятие 2.							
	и т.д.							
ИТОГО по Муниципальной Программе	Х	Х	Х			Х	
2.	Расчёт результативности и эффективности Программы.
3.	Используемые сокращения:
Подпись: ________________________/______________/_______________________/
                                  /должность/				       /расшифровка подписи/
Дата составления отчёта: __________________